공약연번	메인스타디움 종합경기장 건립의 차질없는 마무리		담당부서
100
			전국체전추진단

	최종목표
메인스타디움 종합경기장 건립을 통한 성공적인 전국체전 개최

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	100 %	총사업비	116,300백만원
추진상황	완료 ● 완료후계속추진 ○ 정상추진 ○ 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 12. ~ 2023. 9.

○ 위    치 : 대양동 산124번지 일원

○ 사 업 량 : 연면적 26,468㎡, 지상3층, 관람석 16,468석

○ 사업내용 : 종합경기장 및 보조경기장 건립

○ 사 업 비 : 총 1,163억원(국비 200, 도비 330, 시비 633)

☐ 추진현황

○ 목포 종합경기장 건립 기본계획 고시              : 2018. 11.

○ 입찰공고 및 적격업체 선정                            : 2019. 4. ~ 9.

○ 토목 우선 시공분(1차분) 착공                         : 2019. 12.

○ 건축 실시설계 道 건설기술심의(적격)                  : 2020. 6.

○ 2차분(토목+건축) 착공 및 추진                      : 2020. 11.

○ 육상 프레대회 개최                              : 2023. 8. 19.

○ 시운전 및 공사 준공                             : 2023. 9.

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
-	-	3	10회 이상	-

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	공사추진(PC공사, 마감공사, 운동장 조성공사)	공사추진 완료	73%
2023	종합경기장 건립 완료	종합경기장 준공완료(23.9.) 전축체전 개최 예정(23.10.)	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년까지	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	116,300	94,812	21,488	-	-	-
확보액	116,300	94,812	21,488
집행액	109,061	85,924	23,137

☐ 향후계획

○ 전국체전 개최                                   : 2023. 10.

○ 전국장애인체전 개최                             : 2023. 11.

담당부서		전국체전추진단장 정지숙 체전시설팀장 천승환 주무관 김선웅(☎4458)