공약연번 104	전천후 테니스 전용구장 신설		담당부서
			스포츠산업과

	최종목표
체육시설 인프라 구축 및 체육활동 여건 개선

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산○	추 진 율	60%	총사업비	4,000 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 기    간 : 2023년 ~ 2024년

○ 위    치 : 용당동 1069-60번지[구) 유달경기장 옆]

○ 사 업 량 : 테니스 및 정구장 5,400㎡(1,633PY)

○ 사업내용 : 테니스·정구장 코트정비, 사무동 방수층 열화 및 전기 설비 보수, 막구조물 설치, 외부 담장 및 안전울타리 전도 현상 및 균열 보수, 누수발생 보수 및 기초정비

○ 사 업 비 : 총 4,000백만원(국비 2,000, 시비 2,000)

☐ 추진현황

○ 용역과제 사전 심의                                : ’22. 10.

○ 23년 본예산 수립                                  : ’22. 12.

○ 실시설계 착수                                     : ’23.  1.

○ 도시관리계획(변경) 용역 착수                       : ’23.  7.

○ 공원조성계획(변경) 용역 착수                       : ’23.  8.

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	국비확보, 용역과제 사전심의	사업비 확보, 심의 적정	50%
2023	행정절차 이행	용역 추진 중	60%
2024	공사 준공	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	4,000	2,000	2,000
확보액	4,000	2,000	2,000
집행액	100	-	100

☐ 향후계획

○ 도시계획위원회 심의 및 행정절차 이행               : ’23. 11.

○ 공사 착공                                          : ’23. 12.

○ 공사 준공                                          : ’24.  6.

※목차

담당부서		스포츠산업과장 박진홍 스포츠시설팀장 백무황 주무관 이상진(☎3562)