공약연번	산업단지 근로자 복합문화센터 및 작업복 세탁소 설치		담당부서
107
			지역경제과

	최종목표
산업단지에 부족한 편의시설 확충하여 근로자 복지환경 개선

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	30%	총사업비	4,350 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 위    치 : 연산동 1300번지(삽진산단, 現 공용주차장, 3,586㎡)

○ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2025. 5.(3년간)

○ 사 업 비 : 4,350백만원(국비2,70062% 도비345 8% 시비1,305 30%)

○ 사업내용 : 산업단지 내 근로자 특화 복합문화센터 조성

○ 건축규모 : 본관 2층, 1147㎡ (997㎡+150㎡)

- 1층 : 카페 및 북카페, 식당, 관리 사무실, +작업복 세탁소(150㎡)

- 2층 : 스포츠센터(헬스장, 요가실), 다목적 전시 및 공공 회의장

☐ 추진현황

○ 산업단지 복합문화센터 공모사업 선정       :‘22. 3.

○ 공유재산 심의 및 재정투자심사             :‘22. 8.

○ 건축 기획 및 심의                         :‘22. 10. ~ ‘23. 3.

○ 건축 설계공모                             :‘23. 4. ~ 6.

○ 건축기본 및 실시설계 용역                 :‘23. 6. ~ ‘24. 1.

○ 복합문화센터 건립계획 변경                :‘23. 8. 28.

⇒ 1층 필로티 공간내 작업복 세탁소를 포함하여 건립하는 것으로 계획

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
-	-	2	1	-

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	사전 행정절차 이행	각종 심의 완료(′22.12.)	10%
2023	설계 공모 및 용역 시행	설계용역 진행(‘23.6. ~ )	50%
2024	건축공사 착공	-	80%
2025	건축공사 준공		100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	4,350	700	1,284	1,983	383	-
확보액	2,214	700	1,514	-	-	-
집행액	191	28	163	-	-	-

☐ 문제점 및 대책

○ 작업복 세탁장비 예산 확보 방안 강구

※ 전라남도 산업단지 노동자 작업복 세탁소 운영 지원 조례 제5조제1항

1. 세탁시스템구축  2. 작업복 세탁소의 실내환경 개선  3. 그 밖의 도지사가 필요하다고 인정하는 사업

☐ 향후계획

○ 작업복 세탁소 예산확보를 위한 도비 지원 협의  :  ~‘23. 11.

○ 건축 공사 착공                                :‘24. 2.

○ 복합문화센터 및 작업복 세탁소 운영계획 수립   :‘24. 4.

○ 공사 준공 및 센터운영                         :‘25. 상반기

※목차

담당부서		지역경제과장 장명희 산업지원팀장 임희선 주무관 백윤호(☎8772)