공약연번	도서지역 종합개발사업 추진		담당부서
108
			해양항만과

	최종목표
낙후된 섬 지역의 새로운 소득원 개발과 정주여건 개선을 위한 제4차 도서(섬)종합개발사업 추진으로 섬 주민의 삶의 질 향상 도모

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내● 임기후 ○
예산여부	예 산 ○ 지자체 ●	추 진 율	70%	총사업비	19,875 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. ~ 2027.

○ 위    치 : 달리도, 율도, 외달도 등 관내 유인도서

○ 사 업 량 : 달리도~외달도 보행연도교 개설사업 등 14개 사업

○ 사업내용 : 도서지역 정주환경 개선 및 교통·관광 인프라 확충 등

○ 사 업 비 : 199억원(국비80% 159, 도비10% 7020, 시비10% 20)

☐ 지금까지 추진 상황

○ 달리도 커뮤니티센터 조성 등 11개 사업 완료          : `23.  6.

○ 달리도~외달도간 보행연도교 설치공사 추진 중         : `23.  9.

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
20회	5회	20회	10회	-

* (설명회 4회/년)×5년, (만족도 조사 1회)×5년,

(위원회 4회/년)×5년, (언론 2회/년)×5년

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	단위사업 완료 : 10건	단위사업 완료 : 10건	60%
2023	단위사업 완료 : 12건	단위사업 완료 : 11건	70%
2024	단위사업 완료 : 13건		80%
2025	단위사업 완료 : 14건		90%
2026	단위사업 완료 : 14건		100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	19,875	10,290	4,625	3,589	1,371
확보액	14,915	10,290	4,625
집행액	10,286	6,771	3,515

☐ 향후계획

○ 달리도 선착장~쪽박섬간 도로개설공사 준공            : `23. 10.

○ 달리도~외달도간 보행연도교 개설공사 준공            : `25. 12.

※목차

담당부서		해양항만과장 강혜선 섬자원개발팀장 나창영 주무관 강기한(☎8328)