공약연번	북항 해수 정화 인입시설 신설		담당부서
116
			해양항만과

	최종목표
현대화된 인입시설 설치를 통한 청정해수 공급으로 북항 일대 활어 판매 소상공인의 영업환경 개선 및 식품안전성 확보

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	- %	총사업비	1,500 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ○ 일부추진 ● 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 2025.

○ 위    치 : 청호로 219번길 인근(항만구역)

○ 사업내용 : 청정해수 공급시스템 구축

- 규모 : 관경 300㎜, 길이 총 1㎞(해상 200m, 육상 800m)

- 펌프장, 여과기, 살균기, 해수인입 공공관로 등 공용시설은 예산 투입 시설 후 개별 관로는 자체 부담

○ 사 업 비 : 총 1,500백만원(도비 500, 시비 1,000)

☐ 추진현황

○ 수혜 대상 상가 선정 등 사전 자료 조사              :‘22.  9.

○‘22년 시․군 현안사업 재정지원 대상사업 확정         :‘22. 10.

○ 목포지방해양수산청(사업위치, 비관리청 항만개발공사 등) 협의 :‘22. 12.

○ 용역과제 사전심의회 조건부 가결                    :‘23.  2.

※ 시민소통실적(7회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
-	-	-	-	7

* 인근 상인회 대상 사업 안내 및 민원 해소를 위한 협의(′23. 2.~ )

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	해수청 협의	사업위치, 비관리청 항만개발공사 협의	10%
2023	실시설계 용역	용역과제 사전심의	20%
2024	실시설계 용역 및 착공		60%
2025	준공 및 해수공급		100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	1,500		100	900	500
확보액	500		100	400
집행액

☐ 향후계획

○ 청정해수 공급시스템 구축사업 실시설계 용역  :‘24. 3.

○ 공사 착공 및 준공                           :‘24. 10.~‘25. 9.

○ 관리․운영조례 제정 및 위탁자 선정            :‘25. 3.~

○ 청정해수 공급시스템을 통한 해수 취수 및 공급 :‘25. 10.~

※목차

담당부서		해양항만과장 강혜선 항만물류팀장 김세훈 주무관 김은경(☎3494)