공약연번	만호, 유달동 일원 간판정비		담당부서
125
			도시재생과

	최종목표
원도심 지역 간판개선으로 도시경관 수준 향상 및 원도심 활성화

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산● 비예산 ○	추 진 율	80 %	총사업비	385 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2024

○ 위    치 : 구)갑자옥모자점(해안로229번길 20-2)~목포광주약국(해안로 229번길 2-1)

○ 사 업 량 : 73개 업소 간판

○ 사업내용 : 노후간판 및 건물 입면 정비 등

○ 사 업 비 : 385백만원

☐ 추진현황

○‘23. 2. 23. : [1차 구간] 좋은간판 나눔 프로젝트 공모 선정(건설과)

○‘23. 6. 19. : [1차 구간] 광고물 등 정비시범구역 지정(건설과)

○‘23. 7. 26. : [1차 구간] 간판 디자인 및 설계 용역 완료(한국옥외광고센터)

○‘23. 7. 26. : [1차 구간] 간판 디자인 결과 및 추진계획 보고(건설과)

○‘23. 8. 18. : [1차 구간] 만호동 기계의거리 간판개선 1구간 계약의뢰(도시재생과)

○‘23. 9.  7. : [2차 구간] 디자인개발 및 실시설계용역 발주(도시재생과)

※ 시민소통실적(9회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
5회	-	3회	1회	-

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	· 목포시 간판정비계획 수립	· 간판정비계획 수립	30%
2023	· 광고물 등 정비시범구역 지정 및 만호동 사업 추진	· 1차구간 디자인설계 완료 및 계약의뢰	80%
2024	· 간판개선사업 추진	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	385	-	385		-	-
확보액	385	-	385		-	-
집행액	117	-	117	-	-	-

☐ 문제점 및 대책

○ 사업구역 내 상가 폐업 등으로 당초 목표량에 비해 참여 업소 감소

○ 잔여예산 발생으로 추가 사업량 확보를 위해 건설과와 협의 후

정비시범구역 확대 고시 필요

☐ 향후계획

○‘23.  9. ~ 10. : 2차 구간 디자인 개발 및 설계 (도시재생과)

○‘23. 11. ~‘24. 2. : 2차 구간 공사발주 추진 (도시재생과)

※목차

담당부서		도시재생과장 김현종 재생사업팀장 강지한 주무관 김차의(☎3250)