공약연번	동별 공영주차장(주차빌딩) 및 동네주차장 조성		담당부서
129
			교통행정과

	최종목표
❖상가 및 다세대 주택 등 주거밀집지역 주차 공간 부족, 시민 불편 고조 ❖지역 주민과 상권이 상생 가능한 단계적인 동네주차장(주차타워 포함) 조성

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	40 %	총사업비	4,100백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

[용당1동 공영주차장 주차타워 조성사업 (‘22. 1. ~ ‘24. 12.)]

○ 위    치 : 용당동 965-25번지 외 4필지(용당1동행정복지센터 옆)

○ 사 업 량 : 지상 3층(4단), 200면

○ 사 업 비 : 3,600백만원(국 50%, 시 50%)

○ 추진근거 : `22년 주차환경개선지원사업 공모 선정(국토교통부)

[동네주차장 조성(연중)]

○ 위    치 : 목포시 일원

○ 사 업 량 : 연 9~10개소

○ 사 업 비 : 연 50백만원(시비)

☐ 추진현황

[용당1동 공영주차장 주차타워 조성사업]

○‘20. 11. : 2021~2025 중기지방재정계획 반영

○‘21.  2. :‘22년 주차환경개선지원사업(균특) 예산 신청

○‘21.  9. : 지방재정 투자심사

○‘21. 12. : 주자타워 조성사업비 반영(`22년 본예산 / 균15억원, 시15억원)

○‘22.  2. : 실시설계용역 착수 *일시정지 중 : `22.4.23. ~ 현재

- 사업효과 제고 요구(주차면 추가 확보) : 사유지 1개 필지(165㎡) 매입 필요

○‘22. 10. : 사업계획 변경(사업면적 증가에 따른 사업비, 사업기간 등 변경)

※ (당초) 3,000백만원, `22년 → (변경) 3,600백만원, `22년~`23년

○‘23.  3. : 용당1동 공영주차장 도시관리계획 결정(변경) 완료

○‘23.  7. : 편입토지 및 지장물 보상

[동네주차장 조성]

○‘22. 3. : 옥암동 1247-5 일원 (619.8㎡) 16면

○‘22. 6. : 옥암동 1196-5 일원 (546.4㎡) 16면

○‘23. 2. : 용당동 1128-2일원(460㎡) 13면, 산정동 1057-149 일원 (195㎡) 5면

○‘23. 3. : 옥암동 1204-1 일원 (498.5㎡) 16면

○‘23. 5. : 대성동 212-95 일원 (170㎡) 7면

○‘23. 6. : 산정동 1671-18 일원 (336.8㎡) 15면

○‘23. 8. : 옥암동 1204-2 일원 (504.6㎡) 15면

※ 토목 및 부대공사, 주차선, 폐기물처리, 주차안내판 설치 등

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
1	-	-	-	-

* 주민설명회 개최(용당1동 행정복지센터) : `22. 4. 7.

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	예산확보 및 사전절차 이행	예산 신청 및 사전절차 이행 완료	20%
2023	보상 협의 및 실시설계 추진	토지매입 완료 및 실시설계 용역 추진중	40%
2024	용당1동 공영주차장 공사 착공 및 완료	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	4,100	3,000	1,100
확보액	4,100	3,000	1,100
집행액	202	18	184

☐ 문제점 및 대책

○ 건축자재 물가상승 등으로 인한 사업비 증가로 예산 부족

⇒ 2024년 본예산 편성 추진

☐ 향후계획

○‘23.  9. : 지방재정 투자심사(재심사)

○‘23. 11. : 실시설계 완료

○‘24.  1. : 본예산 확보

○‘24.  2. ~ 6. : 공사 착공 및 완료

※목차

담당부서		교통행정과장 윤병종 교통시설팀장 김상훈 주무관 이정훈(☎8293) 주무관 윤강영(☎3683)