공약연번	시내버스 서비스 개선(노선개편)		담당부서
131
			교통행정과

	최종목표
시민 중심의 버스 노선개편으로 대중교통 서비스를 개선하고, 버스 운행의 효율성과 공공성 강화

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	60 %	총사업비	195백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업내용 : 시내버스 노선체계 전면개편 및 준공영제 실행방안 연구용역

- 시민, 버스회사(운전기사) 등의 의견을 반영하여 대중교통 안정성 강화

- 노선별 시민 대중교통 수요 맞춤 배차 조정

- 노선별 시민 대중교통 수요 맞춤 차량 규모 조정

- 공공성 강화를 위한 낭만버스 확대 등

○ 사업기간 :‘22. 3. ~ ‘23. 7.

○ 사 업 량 : 목포시 시내버스(157대, 23개 노선→ 141대, 23개 노선)

☐ 추진현황

○ 용역 착수 및 추진                               : ′22.  4월 ~

○ 담당 변경(대중교통팀 → 시내버스정책TF팀)        : ′23.  1월

- 운수종사자 파업, 가스비 체납에 따른 운행 중단 등의 현황변화를 반영한 새로운 연구 추진

○ 노선개편안 주민설명회                           : ′23.  5월

○ 최종보고 및 용역 완료                           : ′23.  7월

- 시의회 상임위별 별도 보고 완료

○ 공론화 위원회 구성                              : ′23.  8월

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
5	-	10	5	-

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	노선개편 연구	착수보고(4월) 및 용역 진행	20%
2023	노선개편안 도출	주민설명회 및 관계자 회의(5월)	40%
		용역 완료(7월)	60%
		공론화 위원회(~11월) 추진중	70%
		공론화 권고안 반영 정책 결정(12월) 예정	100%
2024	노선개편 실행		100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	195	180	15
확보액	195	180	15
집행액	195	126	69

☐ 문제점 및 대책

○ 안정적인 노선개편 추진을 위한 시민 의견수렴 과정 필요

- 「목포형 대중교통 시스템 구축」 시민 공론화위원회 구성(~9월)

○ 노선개편에 따른 시민 혼란 최소화를 위한 홍보 방안 필요

☐ 향후계획

○ 시민 공론화                               : ′23.  9월 ~ 12월

○ 노선개편안 도출                           : ′23. 12월

○ 노선개편 실행                             : ′24.  1월

- 공론화 권고안을 반영한 노선개편 세부 추진[홍보]계획 수립   ※목차

담당부서		교통행정과장 윤병종 시내버스정책TF팀장 진광선 주무관 이재훈(☎8620)