공약연번	트윈스타~목여고간 잔여구간 도로 확장		담당부서
136
			도시문화재과

	최종목표
주민숙원사업인 트윈스타~목여고간 잔여구간 도로확장을 통해 원도심 접근성 향상으로 인한 원도심 활성화에 기여

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ○ 임기후 ●
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	20 %	총사업비	20,100 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

구 분	총 괄	기 시행	잔여구간
위 치	트윈스타 ~ 목여고	트윈스타 ~ 호남마트	호남마트 ~ 목여고
추진현황		1 ~ 3차분(완료)	4차분(추진중)
사 업 량	도로 L=555m, B=20m	도로 L=260m, B=20m	도로 L=295m, B=20m
사 업 비	362억원	161억원	201억원
사업기간	2008 ~ 2030	2008 ~ 2022	2023 ~ 2030

☐ 추진현황

○ 2008.  9. ~ 2016. 11. : 트윈스타 ~ 그린플라워(L=165m) 도로개설 완료

○ 2017.  1. ~ 2022. 12. : 그린플라워 ~ 호남마트(L=95m) 도로개설 완료

○ 2023.  3. : 호남마트~정영여중(L=170m) 간 도로 실시설계용역 발주

○ 2023.  6. : 호남마트~정영여중(L=170m) 간 협의보상 추진

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	도심관통 도로개설공사(3차구간) 준공	3차구간 도로개설 완료	5%
2023	4차구간(170m) 보상 추진	보상 추진중	20%
2024	4차구간(170m) 보상 추진	-
2025	4차구간(170m) 보상 및 지장물 철거	-
2026~	4차구간(170m) 공사 추진	-

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년이후
예산액	20,100	-	1,000	2,000	2,000	15,100
확보액	500	-	500	-	-	-
집행액	450	-	436	-	-	-

☐ 문제점 및 대책

○ 도심지역으로 토지 및 지장물 등의 감정평가액이 높아 총사업비 중 보상비 비중이 크며, 예산확보 지연에 따른 사업장기화 우려

- 예산부서와 협의하여 예산확보 계획 수립 후 집중투자 및 추진

☐ 향후계획

○ 2023. 11 : 도심관통 도로개설 4차분 실시계획 인가

○ 2024.  1. ~ 2025. 12. : 4차분 예산확보 및 보상 실시, 지장물 철거 등

○ 2026.  1. ~ 2030. 12. : 4차분 보상 실시 및 공사 추진

※목차

담당부서		도시문화재과장 김재성 도심개발팀장 김신철 주무관 김현곤(☎3434)