공약연번	수도시설 현대화로 안전하고 깨끗한 물 공급		담당부서
148
			수도과

	최종목표
ICT를 활용한 수도시설 현대화로 안전하고 깨끗한 수돗물을 안정적 공급

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	70 %	총사업비	34,076백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 (4개년)

○ 위    치 : 목포시 급수구역 일원

○ 사 업 비 : 341억원 【국비 223억원, 시비 118억원】

○ 사업내용

세 부 사 업 명	사 업 내 용	사 업 비(백만원)
		계	국 비	시비	비고
계		34,076	22,320	11,756
지방상수도 현대화사업	노후 상수관망 정비(L=44.9㎞), 유수율 제고용역, 유지관리 시스템 구축 등	21,444	10,722	10,722
신항배수지 신설	배수지(4,000㎥) 송・배수관로 D400mm, L=1.6㎞	9,184	9,184	-
스마트 관망관리 인프라 구축	스마트관로 인식체계 구축 등 11사업	3,448	2,414	1,034

☐ 추진현황

❍ 지방상수도 현대화사업

- 노후 상수관망 정비사업 38개소 완료, 10개소 추진중

- 유수율 제고용역  30개블럭 완료 9개블럭 추진중

- 제어실 개량사업(유지관리시스템 구축) 추진중

❍ 신항배수지 수도사업 인가(전라남도)

❍ 스마트관망관리인프라 구축 4개사업 완료 7개사업 추진중

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적진도율
2022	○ 지방상수도 현대화사업 - 노후 상수관망 정비사업(10개소) - 유수율 제고용역(10개블록) - 유지관리 시스템 구축사업 추진 ○ 스마트관망관리 인프라 구축 - 실시설계 용역 추진 (수질관리,수질감시,위기대응, 물관리시스템 등 11개사업) ○ 신항배수지 신설 - 실시설계 용역 추진	○ 지방상수도 현대화사업 - 노후 상수관망 정비사업(10개소) 완료 - 유수율 제고용역(10개블록) 완료 - 유지관리 시스템 구축사업 계약체결 ○ 스마트관망관리 인프라 구축 - 실시설계 용역 완료 - 스마트미터링 등 4개사업 완료 - 수질계측기 설치 등 7개 사업 계약체결 ○ 신항배수지 신설 - 실시설계 용역준공	30%
2023	○ 지방상수도 현대화사업 - 노후 상수관망 정비사업(10개소) - 유수율 제고용역 (9개블록) - 유지관리 시스템 구축사업 ○스마트관망관리 인프라 구축 - 수질계측기 설치 등 7개 사업 추진 ○ 신항배수지 신설 - 공사 계약 및 착공	○지방상수도 현대화사업 - 노후 상수관망 정비사업 (3개소 착공, 7개소 추진중) - 유수율 제고용역(9개블록) 추진중 - 유지관리 시스템 구축사업 추진중 ○스마트관망관리 인프라 구축 - 수질계측기 설치 등 7개 사업 추진 중 ○신항배수지 신설 - 환경부 승인 등 행정절차 추진중	70%
2024	○ 지방상수도 현대화사업 - 노후 상수관망 정비사업 완료 - 유지관리 시스템 구축사업 완료 - 환경부 성과심사 및 사업 완료 ○ 신항배수지 신설 -공사 진행	-	90%
2025	○ 신항배수지 신설 -공사 준공 및 통수	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년까지	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	34,868	17,289	17,579	-	-	-
확보액	34,868	17,289	17,579	-	-	-
집행액	34,076	11,053	6,713	11,718	4,592	-

☐ 향후계획

○‘23. 10. : 신항배수지 조성공사 계약 및 착공

○‘23. 11. : 지방상수도 현대화 사업 성과보증 신뢰성 제고 용역 착수

○‘23. 12. : 스마트 관망관리 인프라구축 사업 완료

○‘24. 12. : 현대화사업 환경부 성과심사 및 사업완료

○‘25. 10. : 신항배수지 신설사업 완료 및 통수

※목차

담당부서		수도과장 문명식 급수팀장 박재홍 주무관 김재근(☎8563)