공약연번	원도심지역 하수도 분류식화 사업		담당부서
150
			하수과

	최종목표
원도심 하수도 미분류식 지역의 악취 및 해충 등으로 인한 주민피해를 해소하기 위해 분류식화 사업 추진을 통해 주거환경 및 방류수역 수질 개선

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ○ 임기후 ●
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	5 %	총사업비	425,940 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2024년 ~ 2032년

○ 위    치 : 목포시 일원(합류식 구역)

○ 사업내용 : 하수관로 정비 L=363km, 배수설비 등

○ 사 업 비 : 총 4,259억원(국비 60%, 시비 40%)

☐ 추진현황

○ '22.  9. : 민선 8기 공약사항 반영

○ '23.  1. ~ 5. : 행정절차 이행(道 건설기술심의, 입찰공고 등)

○ '23.  6. : 하수도정비 기본계획(변경) 용역 착수

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	하수도정비 기본계획 변경 수립 검토	행정절차 이행	1%
2023	하수도정비 기본계획 변경 추진	기본계획(변경) 용역 착수	5%
2024	하수도정비 기본계획 변경 완료 <사업 우선순위 결정 및 사업 추진>	-	20%
2025	우선순위에 따른 하수도 분류식화 사업 추진	-	60%
2026	우선순위에 따른 하수도 분류식화 사업 추진	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년~
예산액	425,940	0	1,800	1,207	22,933	400,000
확보액	1,800	0	1,800	1,207	22,933	400,000
집행액	1,313	0	1,313	0	0	0

☐ 추진방향

○ 원도심 합류식 지역 분류식화 사업비가 총 4,259억원으로 기 추진중 사업 완료 등 재정건전화 후 개선효과가 큰 지역 중심으로 단계적 분류식화 사업 추진 필요

- 신규 주민 요구 사업은 하수도정비기본계획 반영 및 환경부 승인 후 장기적 추진

☐ 향후계획

○ '24.  6. : 기 국비확정분(내항처리분구) 분류식화 실시설계 추진

○ '24. 12. : 하수도정비 기본계획(변경) 용역 완료

○ '26. ~ '32. : 원도심 지역 분류식화 단계별 추진

※목차

담당부서		하수과장 김광호 하수시설팀장 김기복 주무관 우기훈(☎3537)