공약연번	체험형 영어 도서관 신설		담당부서
25
			인재육성과

	최종목표
❖ 부주·옥암 생활권 내에 문화공간을 조성해 지역주민의 도서관 접근성 제고 및 문화향유권을 강화하고자 함

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ○ 임기후 ●
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	10%	총사업비	20,000백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ○ 일부추진 ● 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년 ~ 2027년

○ 위    치 : 옥암동 1309(영산초등학교 옆 고등학교 부지) ※시유지

○ 규    모 : 부지면적 12,125.3㎡, 연면적 6,000㎡(지하1층, 지상3층)

○ 사 업 비 : 총 20,000백만원(도비 10,000 시비 10,000)

○ 공간구성 : 공약사항(98번) 학부모맘 클래스 센터와 연계

구 분	주 요 시 설	비 고
지하	주차장
1층	AI 회화실, 가상체험장, 미래직업 체험장, 카페테리아 등
2층	미디어 콘텐츠 창작실, 상영관, 동아리실, 다목적실 등
3층	영어 자료실, 옥상정원 등

☐ 추진 현황

○ 건립부지 선정

- 옥암동 1309(영산초등학교 옆 고등학교 부지) ※시유지

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2023	건립부지 확정	부지선정	10%
2024	기본계획 수립	-	30%
2025	투자심사	-	50%
2026	설계용역	-	80%
2027	준공 및 운영	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
예산액	20,000	-	9,000	8,000	1,500	1,500
확보액	-	-	-	-	-	-
집행액	-	-	-	-	-	-

☐ 문제점 및 대책

○ 목포마리아회고등학교 사업부지로 이전 준비 중임

- 설문조사·감정평가 완료

▶ 전라남도교육청에서 사립고등학교 이전설립 승인 시 옥암 대학부지로 사업부지 변경

☐ 향후계획

○‘24. 6. 부주·옥암 지역주민 대상 예정부지에 대한 적합도 및 수혜시설 설문조사

○‘24. 9. 기본계획 등 추진

※목차

담당부서		인재육성과장 오형순 도서관운영팀장 박종국 주무관 김재훈(☎1257)