공약연번	목포시의료원 감염병 대비 격리병동 확충		담당부서
30
			보건위생과

	최종목표
신종감염병의 발생 대비 및 대규모 환자 수용을 위하여 보건복지부 지역거점병원인 목포시의료원에 격리병동을 확충하여 체계적인 감염병 대응 및 의료서비스 제공

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ● 지자체 ●	완료시기	임기내 ●임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	30 %	총사업비	9,800백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년(연차사업)

○ 위    치 : 목포시의료원 본관(정문) 좌측면(별동 증축)

○ 규    모 : 지상 3층, 연면적 2,168m2

○ 사업내용 : 긴급치료병상(격리병동), 건강증진센터, 비뇨의학센터 등

○ 사 업 비 : 98억원(국비 2930%, 도비 4.24%, 시비 24.826%, 자부담 4040%)

☐ 추진현황

○‘21~‘22년 기능특성화 지원 사업계획서 제출 및 선정 :‘21.5.~

- 보건복지부 호흡기 및 긴급치료병상 58억원 지원 확정 : ‘22.3.

- 목포시의료원 기능보강사업 마스터플랜 연구용역 실시 : ‘22.5.

- 마스터플랜 반영된 최종 사업승인 및 사업비 확정(58→98억원) : ‘22.6.

○ 전라남도 지방재정 투자심사 심의                     :‘22.8.~10

○ 설계공모 전 목포시 설계용역 계약심사(일상감사) 및 심사위원 선정 :‘22.10.~12

○ 긴급치료병상 증축공사 기본 및 실시설계 공모, 당선작 선정 :‘23.3~6.

○ 설계용역 계약 및 국립중앙의료원 협의 방문           :‘23.7.

- 기본설계 심의 신속 결정을 위한 설계 방향 협의

○ 설계용역 선급금 지급 완료(216백만원)                      :‘23.8.

○ 기본설계 완료 및 심의 신청                          :‘23.9.~10.

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	긴급치료병상 계약심사	설계용역 계약심사 및 심사위원 선정 완료	10%
2023	긴급치료병상 설계완료 및 시공사 선정	실시설계 공모 및 완료, 설계용역 완료	30%
2024	긴급치료병상 준공	시공사 선정, 착공 및 준공	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
예산액	9,800	2,000	4,620	980	4,000
확보액	9,800	2,000	4,620	980	4,000
집행액	9,800	-	20	465	9,315

☐ 향후계획

○ 실시설계 완료 및 조달청 설계 적절성 검토 신청      :‘23.11.

- 설계 적절성 검토 결과 후 도시계획시설 실시계획 인허가 및 목포시      계약심사(일상감사) 등 행정절차 이행

○ 설계용역 완료 및 완료금 지급                   :‘23.12.

○ 시설공사 업체선정 및 선급금 지급               :‘24.02.

○ 긴급치료병상 증축공사 준공 및 사업완료 보고    :‘24.12.(예정)

※목차

담당부서		보건위생과장 박희자 보건행정팀장 최인옥 주무관 유선경(☎8911)