공약연번	목포시 공영주차장 건립		담당부서
37
			회계과

	최종목표
❖ 청사 주변 공영주차장 건립으로 방문민원인 주차불편 민원해소 ❖ 시청주변 불법주차 근절해소 등 인근 주민에게 주차편의 제공

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	30%	총사업비	5,000백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

□ 사업기간 : 2023. 2 ~ 2024. 2.

□ 위    치 : 용당동 1206-1 외 1필지

□ 사 업 량 : 부지 3,500㎡, 주차장 2층(3단) 연면적 5,000㎡(주차 364대⇒509대)

- 기존 주차장 : 364면(본관동 2대, 민원동 77, 의회동 62, 야외 223) *야외 145대 증

□ 사 업 비 : 총 5,000백만원(국비 2,500 시비 2,500)

☐ 추진경과

□ 2022.  7.  2023년도 균특전환사업 신청(주차환경개선)

□ 2022. 12.  2023년도 균특전환사업(주차환경개선) 확정(50억)

□ 2022. 12.  사업부지 용당동 1206-1 (야외주차장4,405㎡) 소유권 확보

□ 2023.  2.  목포시 공영주차장 주차타워건립 실시설계용역 착수

□ 2023.  9.  구)청호중학교 운동장 임시주차장 사용허가 협의완료(‘24. 2. 까지)

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
-	-	3회		-

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	기본계획 및 국가균특 (주차환경개선) 신청	사업확정	10%
2023	사업비 확보 설계용역 및 공사착수	- 사업비 확보 완료 - 설계용역 착수완료 - 공사착수 예정(10월)	30%
2024	공사추진 및 준공	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	5,000		5,000
확보액	5,000		5,000
집행액	100		100

☐ 향후 추진계획

□ `23.   9.    행정절차 이행(공공디자인심의, 건설기술심의)

□ `23.  10.    목포시 공영주차장 주차타워 건립공사 입찰공고

□ `23.  10.    목포시 공영주차장 주차타워 건립공사 착수

□ `24.   2.    목포시 공영주차장 주차타워 건립공사 준공

※목차

담당부서		회계과장 박호빈 청사관리팀장 박철우 주무관 이제만(☎3275)