공약연번	목포역사 신축 및 철도시설 재배치		담당부서
40
			기획예산과

	최종목표
미래 발전에 부합하는 역사 현대화를 통한 지역경쟁력 강화 및 수요증가에 대비한 철도시설 재배치로 이용객의 편의 도모

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ● 지자체 ○	완료시기	임기내 ○ 임기후 ●
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	30 %	총사업비	169,000 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. ~ 2028.

○ 위    치 : 목포시 호남동 1-1, 목포역 일원

○ 사업내용 : 목포역 신축 및 철도시설 재배치

-  (역사 신축) 서남권 랜드마크형 역사 건립 (‘24~)

-  (철도시설 재배치) 착발선 증설, EMU열차 통합정비고 신설 등 기능개선

○ 사 업 비 : 1,690억원(역사 신축 490, 철도시설 재배치 1,200)

☐ 추진현황

○ 목포역 철도시설 재배치 및 기능개선구상 용역(목포시) :‘20. 10. ~‘22. 3.

○ 국토부 용역에 우리시 재배치(안) 반영 건의 :‘22. 7.

- (국토부)목포역 철도시설 재배치 사전타당성 조사 용역(‘22.6.~‘23.3.)

○ 코레일 사업비에 역사신축 실시설계 반영 건의 :‘22. 9.

○ 국토부 용역에 우리시 재배치(안) 확정 :‘22. 12.

○ 코레일 투자심사(‵23. 2.)전 역사 신축 사업비 확정 건의 :‘23. 1.

○ 관계기관 협의(국토부, 국가철도공단, 한국철도공사) : ~‘23. 8.

○ 목포역 노후역사 신축사업 설계비‘24년 정부 예산안 반영 :‘23. 8. 29.

- 설계비 : 2.75억원 / (국비) 1.1억원40%, (코레일) 1.65억원60%

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
-	-	-	1	-

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	◦목포역 대개조 사업 계획 및 국비 반영 요청	◦사업 예산 확보 및 신속 추진 지속 건의	20%
2023	◦(사업추진)목포역사 신축 실시설계 및 국비 반영	◦노후역사 신축사업 설계비 ‘24년 정부 예산안 반영	40%
2024	◦(사업추진)목포역사 신축 및 철도시설 재배치 추진		60%
2025	◦(사업추진)목포역사 신축 및 철도시설 재배치 추진		80%
2026	◦(사업추진)목포역사 신축 및 철도시설 재배치 추진		100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	169,000
확보액
집행액

* (역사신축) 24년도 설계비 2.75억원 반영 ⇒ 실시설계 공모 추진

⇒ 25년도 예산확보 후 공사착공 등 사업 추진

* (시설 재배치) 23년도 철도시설 재배치 사업 총사업비 변경 협의(국토부⇒기재부)

⇒ 23년 실시설계비 53억원, 확보 후 사업 추진

☐ 문제점 및 대책

○  (문제점) 목포역사 신축에 따른 소유권(무상임대) 문제(국토부, 코레일, 공단) 및 재배치 사업 총사업비 변경 협의(국토부, 기재부) 등으로 인해 사업 추진 지연

○  (대책) 호남고속철도, 남해선 개통과 열차수요 증가에 따른 역사 신축 및 철도 설 확충 등 사업 필요성을 바탕으로 신속 추진 지속 건의

☐ 향후계획

○ (목포시)목포역 신축 디자인 현상공모 추진 :‘23. 9. 이후

- 목포시 신축 디자인(안) 코레일에 반영 요청

○ (코레일)목포역 신축 실시설계 공모 추진 :‘23. 10. 이후   ※목차

담당부서		기획예산과장 차명신 기획팀장 박승용 주무관 김효승(☎8504)