공약연번	목포 스마트그린 산업단지 조성		담당부서
43
			청년인구과

	최종목표
산업 밸류체인의 디지털화, 저탄소·고효율 에너지혁신을 통한 산업·공간·사람 중심의 산단 조성으로 지역경제 활성화 및 청년 일자리 창출

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ○ 임기후 ●
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	5 %	총사업비	160,000백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2030년

○ 위    치 : 목포시 관내 공유수면 매립

○ 사 업 량 : 조성면적 20만평 규모

○ 사 업 비 : 1,600억원

○ 개발방식 : 자체, 특수목적법인(SPC) 등

☐ 추진현황

○ 사전타당성조사 용역 추진(위치, 규모 등)	:	`22. 10. ~
○ 일반산업단지(18만평) 추진(위치, 규모) 시장님 결재	:	`23. 04. 20.
○ 국가산업단지 추진 시장님 검토지시	:	`23. 05.
○ 국가산업단지 공동추진 무안군 협의 - 조성면적 58만평 협의가능, 조성면적 100만평 이상 郡관리계획(전원도시) 어업권, k푸드융복합 일반산업단지 조성 등으로 회의적	:	`23. 05. 08 ~ 07. 27.
○ 전라남도(투자유치과 산단조성팀) 협의 - 일반산단 물량 배정에는 어려움이 없고, 산업단지 지정계획 신청 전 공유수면 매립 관련은 해수부와 해수청 협의 선행 필요, 국토부 국가산단 지정은 어렵다는 입장	:	`23. 08. 16.
○ 목포지방해수청(해양수산환경과) 협의 - 산업입지에관한법률(제21조), 산업단지 인․허가 절차 간소화를 위한 특례법(제8조)에 따른 해수부 매립기본계획은 의제처리 사항임. - 사업구역은 항만 제외 구역으로 전남도 협의 요청 시 적극 협조 입장 - 매립면허 승인은 해수청 위임사항으로 사업추진 시 적극협조 약속	:	`23. 09. 06.

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	사전타당성조사용역 발주	용역중	5%
2023	사전타당성조사용역 추진 및 입주의향서 모집	용역중, 입주의향서 모집중	7%
2024	산업단지지정계획 승인		10%
2025	구역지정 및 개발계획 승인		30%
2026	실시계획 승인		40%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액		22		3,000	3,000	15,000
확보액		22
집행액			20

☐ 향후계획

○ 일반산단 추진 시 국토부(지정계획), 해수부(매립기본계획) 협의	:	`23. 09. ~ 11.
○ 일반산단(18만평) 입주의향서 및 업무협약서 모집	:	`23. 11. ~ 12.
○ 일반산업단지지정계획 신청(도→국토부)	:	`24. 01.
○ 일반산단 구역지정 및 개발계획 용역(전남도)	:	`24. 04. ~ `25. 05.
○ 실시계획․설계, 착공 및 준공	:	`25. 04. ~ `30. 12.

※목차

담당부서		청년인구과장 최성철 스마트그린산단팀장 권용선 주무관 박대건(☎8213)