공약연번	청년 스타트업 지식산업센터 건립		담당부서
45
			청년인구과

	최종목표
지역특화산업(관광, 해양수산, 조선, 신재생 등)의 성장기반 마련 및 창업지원을 포함한 일자리 창출로 청년이 돌아오는 목포 실현

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ○ 임기후 ●
예산여부	예 산 ○ 지자체 ●	추 진 율	20%	총사업비	30,600백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 총 사 업 비 : 306억원 (국비 160, 도비 44, 시비 102)

○ 사 업 기 간 : 2024년 ~ 2028년

○ 위       치 : 대양동 1193-29 (8,550㎡/ 목포 대양일반산업단지 內)

○ 관 련 부 처 : 중소벤처기업부(설계 및 건축비 70%, 최대 160억원 지원)

○ 사 업 규 모 : 지식산업센터 1동(연면적 10,894.32㎡/ 지하1층 ~ 지상5층)

○ 사 업 내 용 : 청년 벤처창업기업 입주공간 구축

- 기업입주동(50실), 연구동, 회의실, 투자상담실, 입주자쉼터 등

○ 관 련 절 차

기본계획	부지확보	중앙투자심사	건립타당성평가	중기재정계획	각종영향평가	비 고
○	○	승인(23. 6. 5)	통과(23. 6. 12)	반영(22. 12. 28)	해당없음(산단)

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
-	-	-	2	-

☐ 추진현황

○ 24년 신규 지식산업센터 수요조사 회신(전남도)	:	`22. 10.
○ 지식산업센터 입지 수요조사 용역	:	`22. 9. ~ 11.
○ 지식산업센터 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역	:	`22. 11. ~ `23. 3.
○ 공공건축 사업계획 사전검토 및 건축기획 용역	:	`23. 2. ~ 7.
○ 지식산업센터 건립 사업신청(전남도)	:	`23. 3.
○ 지방재정 중앙투자심사 승인(행안부)	:	`23. 6. 5
○ 신규 지식산업센터 건립 타당성 평가 통과(중기부)	:	`23. 6. 12.
○ 공공건축위원회 심의, 일상감사, 계약심사(道)	:	`23. 7. ~ 8.

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	수요조사, 기본계획 용역 추진	수요조사, 기본계획 용역 완료	10%
2023	타당성조사 용역 추진, 국비지원	타당성조사 용역 추진 및 국비확보 완료	20%
2024	설계용역, 센터 건립 공사 공정률 10%		40%
2025	센터 건립 공사 공정률 40%		80%
2026	센터 건립 공사 공정률 60%		100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년이후
예산액	306	22	2	14	37	231
확보액	24	22	2
집행액	23	22	1

☐ 향후계획

○ 일반설계 공모	:	`23. 9. ~ 12.
○ 기본 및 실시설계 용역계약 및 수행	:	`24. 1. ~ 12.
○ 사업필지 실시계획(관리기본계획) 변경	:	`24. 7.
○ 센터 건립공사 착공 및 준공	:	`25. ~ `28.

※목차

담당부서		청년인구과장 최성철 스마트그린산단팀장 권용선 주무관 김요한(☎8132)