공약연번	목포 청년쉼터 건립		담당부서
52
			청년인구과

	최종목표
목포 청년에게 문화와 휴식을 제공하는 도심 속 쉼터로서 청년의 잠재력과 가능성을 펼칠 수 있는 자기주도적 활동의 공간 마련

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ○ 지자체 ●	추 진 율	20%	총사업비	1,772백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 총 사 업 비 : 1,472백만원 (국비 500, 시비 972)

○ 사 업 기 간 : ‵21. 12. ~ 24. 5. (당초 ‵23. 12.)

○ 위       치 : 목포시 온금동 3-9 (구. 제일여고 입구)

○ 사 업 규 모 : 대지 1,053㎡ / 연면적 299.35㎡(2층)

○ 사 업 내 용 : 청년카페, 전시공간, 독서공간, 공연장, 공유주방, 테라스 등

○ 기 타 사 항 : 의회 및 지역 청년단체* 의견수렴 후 계획 반영

- 1차 간담회 : 수변공간 조성, 디자인 및 색채, 행사 등의 프로그램 생성 의견제안

- 2차 간담회 : 2층 테라스 증축, 추가 인테리어 용역 발주 제안

※ 청년행복스쿨 의원(6) : 박효상, 고경욱, 유창훈, 최지선, 정재훈, 최원석 / 청년단체 (6) : 청년대표 박광배(블루빈) 외 5

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
-	-	2	-	-

☐ 추진현황

○ 지역현안수요 특별교부세 사업 신청	:	‵21. 5.
○ 사업 확정 및 특교세(5억) 예산 반영	:	‵21. 9.
○ 실시설계 용역	:	‵21. 12. ~
○ BF(장애물 없는 생활환경)인증 컨설팅 용역	:	‵22. 4. ~
○ 이로공원 공원조성(변경) 허가 신청 및 건설기술심의	:	‵22. 10.
○ 건립부지 변경 [상동 1042-1(이로공원)→ 온금동 3-9]	:	‵22. 12.
○ 공유재산심의(재산이관/ 회계과 → 청년인구과) 승인	:	‵22. 3.
○ 의회 및 지역 청년단체 1차 간담회	:	‵23. 3. 31.
○ 道 문화재심의 승인	:	‵23. 5. 13.
○ 의회 및 지역 청년단체 2차 간담회	:	‵23. 5. 15.
○ 市 건설기술심의 조건부 의결	:	‵23. 7. 11.
○ 전남도의회(특별조정교부금) 인테리어 공사비(2.5~3억원) 지원 협의	:	‵23. 9.

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	건립부지 변경	건립부지 변경 검토 완료	5%
2023	실시설계 용역 및 공사착공	실시설계용역 추진중	30%
2024	공사 준공 및 청년문화복합공간 운영		100%
2025	청년문화복합공간 운영 활성화		100%
2026	청년문화복합공간 운영 활성화		100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년이후
예산액	1,472	1,072	400
확보액	1,472	1,072	400
집행액	73		73

☐ 향후계획

○ 석축 구조안전진단 및 실시 설계용역 완료	:	‵23. 10.
○ BF인증 완료 및 공사 계약의뢰	:	‵23. 10.
○ 공사 착공	:	‵23. 12.
○ 청년쉼터 세부운영계획 수립	:	‵24. 3.
○ 공사 준공 및 쉼터 개소	:	‵24. 5.

※목차

담당부서		청년인구과장 최성철 스마트그린산단팀장 권용선 주무관 김요한(☎8132)