공약연번	해상풍력 배후단지 및 지원부두 조성		담당부서
54
			지역경제과

	최종목표
성공적인 해상풍력 산업 생태계 조성을 위한 지원인프라 구축

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ● 지자체 ○	완료시기	임기내 ○ 임기후 ●
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	10 %	총사업비	100,000 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2028

○ 위    치 : 목포 신항 일원

○ 사 업 량 : 철재부두 1선석(3만톤급) 및 2단계 배후단지(238,000m2) 조성

○ 사업내용 : 해상풍력 전진기지 조성을 위한 지원인프라 구축

☐ 추진현황

○ 해상풍력 지원부두 및 배후단지 조성 건의 및 예타 신청 : `22. 8.

- 해수부 : 사업타당성 및 근거(향후 물동량 등) 보완 후 재신청

○ 해상풍력 지원부두 및 배후단지 건설을 위한 타당성 보완 : ~ `22. 12.

- 해상풍력 관련 예상 철재물동량 근거 등 사업추진 설득논리 보완

○ 신항 지원부두 건설 건의를 위한 정부부처(해수부) 방문	: ‘23. 2.

- 해상풍력 전용부두 조성의 필요성 및 타당성 설명 ☞ 해수부 동의

※ 해수부 : 용역(신항부두 재배치 검토) 결과 국가기본계획 반영 후 추진 요망

○ 지원부두 적기 건설을 위한 정부부처 건의 활동 <계속>

- 신항 자유무역지구 및 기회발전특구 지정 노력 병행(道 주관)

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	사업 타당성 보완	근거보완 및 부처 건의	5%
2023	신항 재배치 의견 반영 및 조기건설 건의	해수부 지속 건의 활동 진행 중	10%
2024	국가 기본계획 반영	-	30%
2025	사전타당성 조사 및 국고 반영	-	50%
2026	지원인프라 설계	-	60%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	100,000	-	-	-	3,000	97,000
확보액	-	-	-	-	-	-
집행액	-	-	-	-	-	-

☐ 문제점 및 대책

○ 기본절차 모두 이행 후 사업착수 시 `29년 이후 조성 완료 예상

- 국가계획 변경고시(`24), 사전타당성 조사(`25), 실시설계(`26), 착공(`27)

※ ‘신항 부두 재배치 검토용역’ 수행 중 (해양수산부, ~`24. 12.)

☞ 사업추진 시급성 지속 건의를 통한 기본계획 반영 즉시 국고 확보 추진

☐ 향후계획

○ 국가계획 반영 및 국고 확보를 통한 인프라 적기 건설 추진

- 해수부 용역 내용에 지원부두 先 건설 및 규모 확대(3→5만톤급) 건의

- 조기 건설을 위한 예비타당성 또는 사전타당성 조사 우선 신청 검토

○ 국내․외 관련기업(베스타스 등) 투자 유치 행․재정 지원 <계속>

※목차

담당부서		지역경제과장 장명희 신산업팀장 김진명 주무관 정재원(☎4049)