공약연번	해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축		담당부서
55
			지역경제과

	최종목표
해상풍력 산업 고도화를 위한 통합지원체계 구축 및 운영

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ● 지자체 ○	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ○ 비예산 ○	추 진 율	40 %	총사업비	27,450 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2024

○ 위    치 : 목포 신항 일원

○ 사 업 량 : 해상풍력 플랫폼센터(연면적 약 3,260m2) 건립 등

○ 사업내용 : 해상풍력산업 활성화, 연구개발 및 기업지원 체계 구축

- 통합지원센터 및 기자재 물류지원 공공인프라 Warehouse 구축 등

<플랫폼센터 건립 개요>

• 조성위치 : 목포 신항(달동 1330-63)

• 조성규모 : 부지면적 약 5,000m2, 건축 연면적 약 3,260m2(4층)

• 공간구성 : 유지보수실, 기업공동연구실, 통합관제실, 홍보실, 대회의실 등

• 소요예산 : 부지매입 25억원, 설계 5.7억원, 공사 118억원

☐ 추진현황

○ 해상풍력 물류관리 시스템 개발 등 R&D사업 추진	: ~ `22. 12.

○ 산업부 공모사업(비R&D) 수주 및 추진	: `21. 11. ~

○ 신항 플랫폼센터 부지((4,995m2) 매입	: `22. 4.

○ 공유재산 심의 및 관리계획 승인(건축)	: `22. 8.

○ 목포 신항 플랫폼센터 실시설계	: `22. 7. ~‘23. 8.

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	R&D 완료 및 플랫폼센터 설계 착수	플랫폼센터 설계 (`22. 5. ~)	30
2023	센터 건축공사 착공	설계 완료(`23. 8.) 및 공사 착공(`23. 10.)	50
2024	센터 준공 및 항만인프라 구축 완료	-	100
2025	물류인프라 및 통합관제시스템 등 운영	-	100
2026	연계 신규사업 유치	-	100

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	27,450	6,910	12,354	8,186	-	-
확보액	19,264	6,910	12,354	-	-	-
집행액	12,160	6,910	5,250	-	-	-

☐ 문제점 및 대책

○ 실시설계 지연(각종 인증절차 및 설계 보완)에 따른 착공시점 연기

- 예상 공사기간 15개월 : 사업기간 내(`24. 12.) 준공 가능

※ 공사 지연 시, 산업부 및 전담기관(한국에너지공단) 협의 후 사업기간 연장 신청

☐ 향후계획

○ 신항 내 플랫폼센터 건축공사 착공	: `23. 10. 예정

* 엔지니어링실, 기업공동연구실, 통합관제실, 대회의실, 홍보관 등 (4층 규모)

○ 해상풍력 물류인프라 및 통합관제시스템 운영 : `24. 12. ~

※목차

담당부서		지역경제과장 장명희 신산업팀장 김진명 주무관 정재원(☎4049)