공약연번	친환경선박 산업 집적화단지 조성		담당부서
56
			지역경제과

	최종목표
글로벌 수준의 친환경선박 연구‧실증‧교육 특화단지 구축

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ● 지자체 ○	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	40 %	총사업비	117,904백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2031   * `25년까지 가시적 성과도출(인프라구축 완료)

○ 위    치 : 목포 남항 일원

○ 사 업 량 : 남항(32,000m2) 내 연구지원 인프라 구축 등

- 전기추진차도선 등 신기술 적용 미래형선박(3척) 개발 포함

○ 사업내용 : 국내 최초 친환경선박 클러스터 조성 및 운영

☐ 추진현황

○ 해수부 정부공모사업(R&D) 4건 수주 및 정상 추진

○ 남항 연구지원 인프라 구축 착공식	: `22. 10. 27.

○ 남항 교육연구지구 조성 및 활용방안 수립 연구용역(`23. 5. ~ 12.)

○ 연구인프라 2개동 준공(`23. 8.)

- 전기추진 차도선 지원인프라 : 충전시험동, 관제유지보수동

※ 시민소통실적(회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
-	-	-	8	-

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	연구지원 인프라 착공	1단계 인프라 착공식	30
2023	1단계 준공 및 신규 선박 설계	1단계 인프라 준공 완료	40
2024	연구 및 교육거점 기반 마련	-	60
2025	전체 인프라 구축 완료	-	100
2026	인프라 지속 운영 및 확대	-

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년~
예산액	117,904	22,608	32,366	28,191	22,830	11,909
확보액	54,974	22,608	32,366	-	-	-
집행액	54,974	22,608	32,366	-	-	-

☐ 문제점 및 대책

○ 정부 R&D 예산 감축기조 및 공사비 급증 이슈 발생

- 해당부처 설득 및 KRISO 자체예산 투입 등 전방위적 대응 진행

☐ 향후계획

○ 2단계 연구인프라(연구동, 전력시험동, 복지동) 착공	: `23년 3분기

○ 연구용역 완료 및 해수부 논의	(남항 관련)	: ~ `23. 12.

- 제3차 항만재개발기본계획 변경 추진(해양항만과 협업)

○ 전기추진 차도선 시범운항(목포권역)	: `25년 1분기~

○ `25년 신규사업 기획 및 수주(1~2건)	: `25년 1분기

○ 연구인프라 전체(5개동) 준공	: `25년 2분기

- 실증인프라, 연구거점(KRISO) 및 석박사 학위과정(UST) 운영

※목차

담당부서		지역경제과장 장명희 신산업팀장 김진명 주무관 정재원(☎4049)