공약연번	목포시농업기술센터 건립		담당부서
57
			농업정책과

	최종목표
❍ 도시와 농촌의 상생을 위한 건강한 도시농업 구현 ❍ 급속한 도시화에 따른 사회 환경 및 농업 기반 개선

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	20 %	총사업비	4,873 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

○ 위치(예정) : 삼향동 구)종합관광안내소 인근

○ 사업규모 및 내용 : 농업기술센터 건립(청사 신축)

- 대  지 : 2,555㎡(773평),

- 건  물 : 지상 2층(사무실, 교육장, 회의실 등), 연면적 950㎡

○ 사업비 : 4,873백만원(국비 1,930, 도비 50, 시비 2,893)

- 예산 : (시비) 부지매입비 및 설계비

(국·도비) 건축비 및 기반장비 : 농촌진흥청 농촌지도기반조성사업

☐ 추진현황

○ 2023년 3~4월 : 기본계획수립 및 부지선정, 공유재산 취득심의

○ 2023년   5월 : 공유재산 관리계획 승인 부결, 도 투자심사 취하

- 부결사유 : 부지 매입비용 절감 및 시범포 재배 적합면적 확보

○ 2023년 6~7월 : 부지 재선정, 사업추진계획 재수립

○ 2023년 7~8월 : 공유재산 취득심의 및 관리계획안 제출

○ 2023년   9월 : 공유재산 관리계획 및 도 지방재정 투자 심사 진행 중

※ 시민소통실적(회)

설명회, 간담회	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
4	-	-	-

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2023	계획수립, 부지선정	행정절차이행중	20%
2024	설계완료, 예산확보	-	60%
2025	공사 착공 및 준공, 장비구입		100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2023년	2024년	2025년
예산액	4,873	165	698	4,010
확보액	117	117
집행액	0	0

☐ 향후계획

○ 행정절차(공유재산·투자심사,재정반영)이행  : ’23.  9. ~ 11.

○ 예산(부지매입비) 확보 및 설계용역          : ’23. 11. ~‘24. 2.

○ 부지매입 및 농진청 2025년도 보조사업 신청  :‘24.  3. ~ 12.

○ 농업기술센터 건립공사 착수 및 완공        :‘25.  1. ~ 12.

※목차

담당부서		농업정책과장 황성용 농업지원센터팀장 박야영 주무관 정희식(☎3371)