공약연번	체류형 관광시설 확충 (콘도, 펜션, 카라반, 캠핑장, 짚라인 등)		담당부서
64
			관광과

	최종목표
해상케이블카와 연계하여 휴양 및 체험·놀이시설 등머무를 수 있는 체류형 관광시설 확충하여 2천만 관광객 유치 달성

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	50 %	총사업비	262,400백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026

○ 위    치 : 목포시 고하도, 장좌도, 율도, 외달도, 달리도, 북항 일원

○ 사 업 량 : 펜션 및 캠핑장 조성, 장좌도 유원지 개발 및 관광호텔 신축 7개소 등

○ 사 업 비 : 총 262,400백만원(국·도비 4,630, 시비 3,670, 민자 254,100)

○ 사업내용

- 장좌도 (호텔, 펜션 조성 등)

· 위    치 : 율도동 장좌도 일원

· 규    모 : 연면적 46,845㎡(호텔 74실 25층, 펜션 183실 25층)

· 놀이시설 : 루지, 대관람차 등

· 준공예정 : 2024. 12.

· 사 업 비 : 254,100백만원(민자사업)

- 율도 캠핑장 조성 * 추진부서 : 해양항만과

· 위    치 : 율도동 181번지 앞 공유수면

· 사업기간 : 2023.1 ~ 2023. 12.

· 시    설 : 캠핑장(15면), 화장실, 취사장, 관리동

· 사 업 비 : 500백만원

※ ‘27년 국도77호선 준공예정(압해도 ↔ 율도 ↔ 달리도 ↔ 해남)

- 체류형 관광패키지 개발

· 유달유원지 앞 해상 스카이워크 시설 확장 추진 (2,800백만원 /‘23년까지)

· 고하도 해상데크 3차 및 해안동굴 탐방로 조성(5,000백만원)

☐ 추진현황

○ 장좌도 유원지 투자협약(전라남도+목포시+민간)      : 2019.  7.

○ 도시관리계획(유원지/조성계획) 결정                : 2020.  3.

○ 토목공사 착공(부지조성 등)                        : 2021.  3.

○ 도시관리계획 결정(변경) 신청                       : 2023.  9.

※ 시민소통실적(47회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
10	2	5	10	20

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	사업대상지 검토 및 사업구상 용역 실시	사업구상 완료	30%
2023	기반시설 부지매입 투자협약 체결 사업공모	투자협약 체결	50%
2024	사업계획 승인		70%
2025	사업완료		100%
2026	섬 연결사업 추진

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	262,400	257,400	3,000	2,000
확보액	260,400	257,400	3,000	-
집행액	257,100	256,600	500	-

☐ 향후계획

○ 2023년

- 장좌도 유원지 도시관리계획 변경 추진

- 신규사업 투자자 유치, 도시관리계획 변경 결정 등 행정절차 추진

- 유달유원지 스카이워크 시설 확장 완료(L=120m)

- 고하도 해상데크 3차 및 해안동굴 탐방로 조성(설계용역) 추진

- 율도 기반시설 공사 및 캠핑장 조성

○ 2024년

- 고하도 해상데크 3차 및 해안동굴 탐방로 조성 공사 완료

- 장좌도 해양관광리조트(놀이시설 및 건축) 공사 추진

※목차

담당부서		관광과장 강광룡 관광사업팀장 서신우 주무관 이광윤(☎8217)