공약연번	차세대 맞춤형 생산거점 수산물 유통시설 건립		담당부서
81
			수산산업과

	최종목표
저온 위판장 개설을 통한 신선하고 안전한 수산물 공급 기반 마련

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	50%	총사업비	6,000 백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

○ 사 업 비 : 60억원(국비 40%, 지방비 30%(도20%, 시80%), 자부담 30%)

○ 위    치 : 목포시 죽교동 674-3(새우젓위판장)

○ 사업내용 : 수산물 유통시설 건립 1식

- 새우젓 위판장 위생안전체계 구축(저온·폐쇄형 위판장 건립)

○ 추진주체 : 목포수산업협동조합

☐ 추진현황

○ 유통단계 위생안전체계 구축사업 공모 신청(시→해수부) :‘22. 5.

○ 현지조사 및 사업자 선정(해수부→시)              :‘22. 9.

○ 전라남도 지방재정 투자심사 승인                 :‘23. 4.

○ 보조금 교부(도→시)                              :‘23. 8.

※ 세부내용 변경 협의 중(증축 규모확대 : 수협⇔시, 도, 해양수산부)

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	사업자 선정 및 보조금 교부신청	사업자 선정(′22.9.)	20%
2023	실시설계 용역 및 공사시행	예산확보 완료	50%
2024	준공 및 정산완료	-	100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	6,000	-	6,000	-	-	-
확보액	6,000	-	6,000
집행액	-	-	-

☐ 향후계획

○ 보조금 교부(시→수협) :‘23. 10.

○ 기본설계용역 선정 및 착수 :‘23. 10.

○ 비관리청항만개발공사 시행허가 신청 :‘23. 12.

○ 비관리청항만개발공사 실시계획 신청 :‘24. 01.

○ 공사․감리 입찰 공고 및 선정 :‘24. 03.

○ 공사 착공 및 준공 :‘24. 4. ~‘24. 10.

※목차

담당부서		수산산업과장 김일섭 수산유통팀장 권미경 주무관 박종익(☎3798)