공약연번	어린이 생태체험관 확대 조성		담당부서
92
			관광과

	최종목표
자연친화 및 생태를 고려한 체험공간 확대 조성을 통해 관광 시너지 효과 및 어린이들의 미래핵심 역량 함양

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 지자체 ○	추 진 율	50 %	총사업비	10,000백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. ~ 2026.

○ 위    치 : 목포시 용해동 11-11번지 일원(자연사박물관 인근)

○ 사 업 량 : 어린이 생태체험시설 추가 조성(2개소)

○ 사 업 비 : 총 10,000백만원(특교세 500, 도비 3,000, 시비 6,500)

- 용해 생태체험시설 조성 : 7,000백만원 (특교세 500, 도비 1,500, 시비 5,000)

- 용해 어린이 실외체험시설 조성 : 3,000백만원 (도비 1,500, 시비 1,500)

○ 사업내용

- 용해 생태체험시설 조성 : ‘22. 1. ~ ‘23. 11.

· 규    모 : 건물면적 1,594㎡, 지하1/지상2층

· 주요시설 : 실내복합 체험놀이시설 (클라임, 챌린지 코스 등)

· 발주기관 : 목포시 관광과

- 용해 어린이 실외체험시설 조성 설립예정 : ‘24. 1. ~ ‘26. 12.

· 규    모 : 실외체험놀이시설 조성 1식 A=11,897㎡

· 발주기관 : 목포시 관광과

※ 유아숲놀이체험원 설립 예정 (전라남도교육청)

∙사업기간 : ‘21. 12. ~ ‘25. 6.

∙사 업 비 : 19,110백만원

※ 시민소통실적(17회)

설명회, 세미나	만족도 조사	민간자문, 위원회	언론/방송 보도	기타
5	-	10	2	-

☐ 추진현황

○ 용해 생태체험시설(건축, 전기, 통신, 소방, 조경) 착공   : 2023.  1.

○ 용해 생태체험시설 실내체험놀이시설 제작·설치 착수  : 2023.  7.

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	실시설계	실시설계용역 완료	30%
2023	공사 착공 및 준공 (1개소)	생태체험시설 준공	70%
2024	용역 착수 및 완료 (1개소)		80%
2025 ~2026	공사 착공 및 준공		100%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	10,000	5,600	1,400	100	2,100	800
확보액	7,000	5,600	1,400	-	-
집행액	3,533	200	3,333	-	-

☐ 향후계획

○ 용해 생태체험시설 조성사업 준공                 : 2023. 12.

○ 실외 체험놀이시설 기본구상 및 타당성 조사용역 추진   : 2024.  2.

※목차

담당부서		관광과장 강광룡 관광사업팀장 서신우 주무관 배준희(☎8216)